【표준품셈】→ 제19장 관접합 및 부설(참고제안)

GSL-P관 접합 및 부설

════════════════

가. 소켓접합                                                                 (개소당)

규 격	배관공	보통인부	비고	규격	배관공	보통인부	기계사용	비 고
D=100	0.033	0.033		D=400	0.138	0.138
D=150	0.042	0.042		D=450	0.150	0.150
D=200	0.060	0.060		D=500	0.133	0.066	0.2Hr
D=250	0.078	0.078		D=600	0.178	0.089	0.25Hr
D=300	0.096	0.096
(1m당으로 환산) 6m/본 이므로 개소당÷6m
규 격	배관공	보통인부	비고	규격	배관공	보통인부	기계사용	비 고
D=100	0.0055	0.0055		D=400	0.023	0.023
D=150	0.007	0.007		D=450	0.025	0.025
D=200	0.010	0.010		D=500	0.022	0.011	0.033Hr
D=250	0.013	0.013		D=600	0.029	0.015	0.042Hr
D=300	0.016	0.016
1. 본 품은 소운반을 포함한 것이다. 2. 터파기, 모래부설 및 다짐, 되메우기, 잔토처리는 별도 계상한다 3. 기계사용(크레인)은 10톤을 기준한 것이다. 4. 특수가공(분기개소 등)을 요할 때는 별도 계상한다. 5. T형 접합은 본 품의 50%를 더 계상한다. 6. 본 품은 현장조건이 보통인 품으로, 현장여건에 따라 20% 증감 할 수 있다.

나. 관 절 단                                                                  (개소당)

규 격	보통인부	비 고	규 격	보통인부	비 고
D=100	0.004		D=400	0.016
D=150	0.006		D=450	0.018
D=200	0.008		D=500	0.020
D=250	0.010		D=600	0.025
D=300	0.012
1. 기구손료는 인건비의 3%를 별도 계상한다. 2. 본 품은 현장여건에 따라 20% 범위 내에서 증감 할 수 있다.

다. HDPE GSL-P관 천공                                                            (개소당)

규 격	보통인부	비 고	규 격	보통인부	비 고
D=100	0.020		D=250	0.033
D=150	0.024		D=300	0.037
D=200	0.029
1.기구손료는 인건비의 3%를 별도 계상한다. 2.본 품은 현장 여건에 따라 20% 범위 내에서 증감 할 수 있다.

라. GSL-P 분기관 접합                                                     (개소당)

규 격	보 통 인 부	비 고
D=100	0.05
D=150	0.055
D=200	0.058
D=250	0.066
D=300
1. 본 품은 소운반을 포함한 것이다 2. 본 품은 현장여건에 따라 20% 범위 내에서 증감 할 수 있다.

라. 흄관 분기관 접합(고무소켓)                                               (개소당)

규 격	보 통 인 부	비 고
D=100	0.0333
D=150	0.040
D=200	0.050
D=250	0.067
D=300	0.077
1. 기구손료는 인건비의3%, 잡재료비는 주재료비의5%를 별도 계상한다. 2. 본 품은 현장여건에 따라 20% 범위 내에서 증감 할 수 있다.

【표준품셈】→ 제22장 하수

22-4 하수관 수밀시험                                   (개소당)

관 경(㎜)	특별인부(인)	보통인부(인)	시험기기(시간)
300 350 400 450 500 600 700 800	0.250 0.268 0.287 0.305 0.322 0.360 0.397 0.434	1.00 1.07 1.15 1.23 1.30 1.46 1.61 1.77	1.08 1.15 1.23 1.29 1.36 1.50 1.64 1.78
1. 시험기기는 Cylinder type 1개, Air Release type 1개, 급수호스ø38～50㎜ 10m, 플라스틱통 1개, 연결호스 ø13㎜ 3m등으로 구성된다. 2. 물탱크, 콤프레셔(3.5㎥/min),용수비 및 물채움 시간에 따른 비용은 별도계상 한다 3. 기구손료 및 잔재료비는 별도 계상한다.

22-5 하수관내 CCTV 조사                 (신설270m당, 기존180m당)

구 분	규 격	단위	수 량	비 고
중급기술자 초급기술자 보 통 인 부 CCTV카메라 CCTV적재차	9인승합차	인 인 인 hr hr	1 1 2 6 6	손료계수 500×10-6
1. 기존관으로서 CCTV 카메라의 진행에 지장을 주는 지장물이 있는 경우 품을 할증할 수 있다. 2. 본 품은 800mm미만의 하수관을 기준한 것이다. 3. 가스검출기 손료는 필요한 경우 별도 계상한다. 4. 본 품은 맨홀 깊이 2m를 기준한 것이다. 5. 기구손료 및 잡재료비는 별도 계상한다. 6. 보고서 작성에 소요되는 품은 별도 계상한다.

22-6  흄관 천공 및 접합                                  (개소당)

구 분		천 공 기		인 력			재 료
본관 (㎜)	연결관 (㎜)	사용시간 (hr)	휘발류 (ℓ)	기계운전사 (인)	특수인부 (인)	보통인부 (인)	몰탈1:2 (㎥)
300 400 450	200 200 200	0.035 0.038 0.045	0.23 0.24 0.25	0.027 0.028 0.030	0.027 0.028 0.030	0.055 0.057 0.061	0.008 0.008 0.008
500	200 300	0.052 0.072	0.25 0.38	0.032 0.048	0.032 0.048	0.065 0.097	0.008 0.017
600	200 300	0.055 0.083	0.26 0.39	0.033 0.052	0.033 0.052	0.067 0.105	0.008 0.017
700	200 300	0.058 0.088	0.27 0.40	0.036 0.053	0.036 0.053	0.072 0.107	0.008 0.017
800	200 300	0.067 0.107	0.28 0.42	0.038 0.056	0.038 0.056	0.077 0.112	0.008 0.017
900	200 300	0.077 0.122	0.29 0.44	0.040 0.058	0.040 0.058	0.080 0.117	0.008 0.017
1000	200 300	0.085 0.138	0.30 0.46	0.045 0.063	0.045 0.063	0.090 0.125	0.008 0.017
1,100	200 300	0.088 0.153	0.31 0.48	0.046 0.065	0.046 0.065	0.092 0.130	0.008 0.017
1,200	200 300	0.102 0.168	0.32 0.50	0.048 0.067	0.048 0.067	0.097 0.135	0.008 0.017
1. 본 품은 흄관을 기준한 것이다. 2. 비트의 사용회수는 300회를 기준으로 한다. 3. 공구손료 및 잡재료비는 별도 계상 한다. 4. 200～300㎜ 이외의 연결관 사용시 상기품을 조정하여 사용한다.

www.seoulpvc.co.kr  주식회사 서울피앤씨   TEL. 031-482-3470